Title: Указ Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 г
Author: НПП "Гарант-Сервис"
Last saved by: Администратор
Document comments: Документ экспортирован из системы ГАРАНТ

Пояснительная записка
к проекту Указа Главы Чувашской Республики «О внесении изменения в Указ Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 г. № 100»

Проект Указа Главы Чувашской Республики «О внесении изменения в Указ Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 г. № 100 «О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике» разработан в целях переноса срока закрытия на рекультивацию Пихтулинской свалки с июля 2012 года на июль 2013 года.
Внесение изменения связано с тем, что закрытие Пихтулинской свалки в июле 2012 года не возможно без ввода в эксплуатацию нового объекта размещения твердых бытовых отходов для г.г. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района (далее – Полигон ТБО).
	На строительство одного из основных объектов Полигона ТБО – мусоросортировочного комплекса (строительство которого ещё не начато) необходимо 10-12 месяцев.
Для строительства подъездной автодороги к Полигону ТБО (необходимость которой указана в государственной экологической экспертизе) в объезд                            г. Новочебоксарска также потребуется около 10-12 месяцев (с учетом прохождения экспертизы).
Для ввода в эксплуатацию Полигона ТБО, в соответствии с требованиями Приволжского управления Ростехнадзора по вводу в эксплуатацию первой очереди пускового комплекса инвестиционного проекта «Полигон твердых бытовых отходов» (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная), должны быть дополнительно устроены первоочередные объекты инфраструктуры (не учтенные в государственным контракте на строительство № 8 от 08.04.2011):
весовая платформа с контрольно-пропускным пунктом;
дезинфицирующая ванна;
навес для стоянки техники;
механизированная мойка для грузовых автомобилей;
административно-бытовой корпус
и приобретена эксплуатационная техника.
Принятие Указа Главы Чувашской Республики по внесению изменения в Указ Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 г. № 100 «О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике» не потребует дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Министр | И.В. Исаев